COMUNE DI CALTAGIRONE
4^ AREA TECNICA
Lavori :	di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile Lotto n. 4. 
CUP B23G12OOOOOOOO2 – CODICE CIG 69459581DF. 	

Impresa :	Costruzioni srl, Via Ettore Majorana s.n., 98040 Torregrotta (ME) 	
Sede Legale: 	Torregrotta (ME) - Via Ettore Majorana, s.n.	
Contratto: RdO n. 1732687 in data 18.04.2018; 	
CERTIFICATO N. 3 PER IL PAGAMENTO DELLA  3 RATA DI EURO       43'260,00
Il Responsabile del Procedimento

Visto il contratto in data 18.04.2018 approvato con Determina Dirigenziale n. 207 in data 05.04.2018, col quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di EURO 221'150.50 al netto del ribasso di -25.000 %.
Vista la dichiarazione liberatoria rilasciata dal Direttore dei Lavori in relazione alle assicurazioni sociali dell'impresa.
Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende, al netto, a EURO      221'143.89, e cioè:
Per lavori di somministrazioni	EURO	     221'143.89	 	
Importo soggetto ad I.V.A.	EURO	           0.00	 	
Imp. Non sogg. ad I.V.A. / Anticipazioni	EURO	           0.00	 	
SOMMANO	EURO	     221'143.89	221'143.89	
DA CUI DETRAENDO:				
Ritenuta del 100% anticipazione di EURO      44'230.10 per anticipazione	EURO	      44'230.10		
Ritenuta del  0.50% su 
EURO      221'143.89	EURO	       1.105,72 		
L'ammontare dei certificati precedenti	EURO	      132'540.00		
Totale delle deduzioni	EURO	      177'875.82	     177'875.82	
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	EURO	      	      43'268.07	
ARROTONDATO A	EURO	      43'260.00	
CERTIFICA
che a termini dell'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'Impresa la rata di EURO       43'260.00 (diconsi EURO quarantatremila -duecentosessanta/00) e EURO        4'326.00 (diconsi EURO quattromila- trecentoventisei/00) per oneri I.V.A.

Caltagirone, li 28 Aprile 2020

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Arch. Angelo Alberghina
__________________________

CERTIFICATI
spediti precedentemente
	
Num.	Data	Importo	
1	07.03.2019	       84'540.00	
2	10/12/2019	      48'000.00	
TOTALE	     132'540.00	

DATI RELATIVI AL LAVORO
Consegna dei lavori in data:                 11.06.2018		
Inizio effettivo lavori in data:	18.06.2018	
Tempo utile contrattuale:	180	
Scadenza del tempo utile contrattuale:	10.12.2019	

SOSPENSIONI

•	Sospensione n.  1 in data 10.07.2018 e ripresa il 12.11.2018;
•	Sospensione n.  2 in data 26.02.2019 e ripresa il 18.11.2019;
•	Concessione proroga in data 22.12.2020;
•	Totale giorni di sospensione e proroga gg.430

•	Nuova scadenza del tempo utile 07.02.2020

	IL DIRETTORE DEI LAVORI
                                                                                                                                               Geom. Luigi Scozzarella
	__________________________